СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
 			
 Смета в сумме:	466818,55 руб	Смету в сумме___________________руб	
 			
  Генеральный директор ООО «ГТМ-стройсервис»		 Глава Администрации МО «Куйвозовское сельское поселение»	
 ____________ Горюшкин А.Е.		____________ Веселов В.И.	
 	
 СМЕТА № 	
 на капитальный ремонт трубопровода от д. 296 до д. 295 д.  Гарболово	
 Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены Декабря 2009 г.	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР01-01-002-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2	0,076	2804,389	2686,675	213,13	8,95	204,19	7,015	0,53	
 	(0) 	ЗП=102,36*1,15; ЭММ=2149,34*1,25; ЗПм=444,13*1,25; ТЗТ=6,1*1,15; ТЗТм=16,9*1,25	1000 м3 грунта	117,714	555,1625			42,19	21,125	1,61	
 2	ТЕР01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2	0,08	3453,6915	0	276,3	276,3	0	217,35	17,39	
 	(0) 	ЗП=3003,21*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=189*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м3 грунта	3453,6915	0			0	0	0	
 3	ТЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	0,076	1125,4875	1125,4875	85,54	0	85,54	0	0	
 	(0) 	ЗП=0*1,15; ЭММ=900,39*1,25; ЗПм=217,14*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=8,87*1,25	1000 м3 грунта	0	271,425			20,63	11,0875	0,84	
 4	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	0,08	1586,1605	0	126,89	126,89	0	111,78	8,94	
 	(0) 	ЗП=1379,27*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=97,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м3 грунта	1586,1605	0			0	0	0	
 5	ТЕР27-04-003-01	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей: однослойных толщиной до 12 см	0,01	3866,4625	2999,9125	38,66	8,44	30	53,107	0,53	
 	(0) 	ЗП=733,8*1,15; ЭММ=2399,93*1,25; ЗПм=627,48*1,25; ТЗТ=46,18*1,15; ТЗТм=26,74*1,25	1000 м2 основания или покрытий	843,87	784,35			7,84	33,425	0,33	
 5.1	408-9305	Гравий для строительных работ фракции 20 (25) -40 мм	1,389868	1286,08		1787,48		
 			м3					
 5.2	408-9394	Песок для строительных работ природный обогащенный	1,389868	451,76		627,89		
 			м3					
 6	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2	0,84	478,977	246,125	402,34	195,6	206,75	14,4095	12,1	
 	(0) 	ЗП=202,48*1,15; ЭММ=196,9*1,25; ЗПм=57,12*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25	100 м3 уплотненного грунта	232,852	71,4			59,98	3,8	3,19	
 7	ТЕР01-02-006-01	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,084	2340,041	1906,0125	196,56	18,31	160,11	15,9965	1,34	
 	(0) 	ЗП=189,59*1,15; ЭММ=1524,81*1,25; ЗПм=340,52*1,25; ТЗТ=13,91*1,15; ТЗТм=13,91*1,25	1000 м3 уплотненного грунта	218,0285	425,65			35,75	17,3875	1,46	
 8	ТЕРр66-26-01	Демонтаж задвижек диаметром до: 50 мм	2	17,47	7,49	34,94	19,96	14,98	0,61	1,22	
 	(0) 		1 задвижка	9,98	1,78			3,56	0,1	0,2	
 9	ТЕР24-01-032-01	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм	2	133,6175	88,8625	267,24	82,11	177,73	2,185	4,37	
 	(0) 	ЗП=35,7*1,15; ЭММ=71,09*1,25; ЗПм=11,75*1,25; ТЗТ=1,9*1,15; ТЗТм=0,49*1,25	1 комплект задвижек или клапана	41,055	14,6875			29,38	0,6125	1,23	
 9.1	300-9124-068	Задвижки 30с 41нж диам. 50 мм 1,6 Мпа клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем	2	2365,82		4731,64		
 			шт.					
 10	ТЕРр66-26-01	Демонтаж задвижек диаметром до: 50 мм	2	17,47	7,49	34,94	19,96	14,98	0,61	1,22	
 	(0) 		1 задвижка	9,98	1,78			3,56	0,1	0,2	
 11	ТЕР24-01-033-02	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	2	22,17	0	44,34	42,32	0	1,2305	2,46	
 	(0) 	ЗП=18,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,07*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 шт.	21,16	0			0	0	0	
 11.1	300-1260	Вентили 15с27нж1 диаметром 25 мм 6,4 МПа	2	1683,44		3366,88		
 			шт.					
 12	ТЕРр66-16-01	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм	1,26	592,59	221,56	746,66	456,09	279,17	22,4	28,22	
 	(0) 		100 м трубопроводов	361,98	44,45			56,01	1,87	2,36	
 13	ТЕР24-01-020-01	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм	0,126	76986,786	13036,85	9700,34	1388,15	1642,64	595,194	74,99	
 	(0) 	ЗП=9580,04*1,15; ЭММ=10429,48*1,25; ЗПм=1522,04*1,25; ТЗТ=517,56*1,15; ТЗТм=70,56*1,25	1 км трубопроводов	11017,046	1902,55			239,72	88,2	11,11	
 13.1	101-9014	Скорлупы из пенополиуретана	21,672	4162,5		90209,7		
 			комплект					
 13.2	Цена поставщика	Трубы в изоляции ппу диам. 57/125 мм, стальные бесшовные в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки	126	530,55		66849,3		
 			м					
 14	ТЕР24-01-029-01	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 50 мм	2	692,904	17,2	1385,81	125,95	34,4	3,2545	6,51	
 	(0) 	ЗП=54,76*1,15; ЭММ=13,76*1,25; ЗПм=2,45*1,25; ТЗТ=2,83*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	1 компенсатор	62,974	3,0625			6,13	0,1375	0,28	
 14.1	101-9014	Скорлупы из пенополиуретана	4	4162,5		16650		
 			комплект					
 14.2	Цена поставщика	Компенсаторы сильфонные скф1- 57 в теплогидроизоляции ппу	2	13721,31		27442,62		
 			шт.					
 15	ТЕР18-07-001-03	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	7,471	0	14,94	13,2	0	0,3565	0,71	
 	(0) 	ЗП=5,74*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,31*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 комплект	6,601	0			0	0	0	
 15.1	Цена поставщика	Манометры мп3-у (д=100 мм, 0-1000...1600 кгс/см2)	2	840,85		1681,7		
 			шт.					
 15.2	300-1115-004	Краны 11ч18бк диаметром 100 мм 0,6 МПа	2	2530,93		5061,86		
 			шт.					
 16	ТЕР18-07-001-04	Установка термометров в оправе прямых и угловых	2	8,038	0	16,08	12,7	0	0,3565	0,71	
 	(0) 	ЗП=5,52*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,31*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 комплект	6,348	0			0	0	0	
 16.1	Цена поставщика	Термометры технические жидкостные ТТЖУ до 200 мм (до 200 град.)	2	144,1		288,2		
 			шт.					
 17	ТЕР22-06-005-03	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм	2	185,7445	127,4875	371,49	103,45	254,98	2,5645	5,13	
 	(0) 	ЗП=44,98*1,15; ЭММ=101,99*1,25; ЗПм=20,01*1,25; ТЗТ=2,23*1,15; ТЗТм=0,88*1,25	1 врезка	51,727	25,0125			50,03	1,1	2,2	
 18	ТЕР07-06-002-03	Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона	0,0072	22412,551	2960,7375	161,37	125,54	21,32	1002,0525	7,21	
 	(0) 	ЗП=15161,49*1,15; ЭММ=2368,59*1,25; ЗПм=298,91*1,25; ТЗТ=871,35*1,15; ТЗТм=12,79*1,25	100 м3 бетонных и железобетонных конструкций	17435,7135	373,6375			2,69	15,9875	0,12	
 18.1	204-9171	Арматура для монолитных железобетонных конструкций	0,0612	18027,32		1103,27		
 			т					
 18.2	401-9021	Бетон (класс по проекту)	0,65808	3231,68		2126,7		
 			м3					
 19	ТЕР16-07-003-06	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	4	179,182	10,05	716,73	539,49	40,2	7,3945	29,58	
 	(0) 	ЗП=117,28*1,15; ЭММ=8,04*1,25; ЗПм=0,42*1,25; ТЗТ=6,43*1,15; ТЗТм=0,02*1,25	1 врезка	134,872	0,525			2,1	0,025	0,1	
 20	ТЕР07-06-002-07	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2	0,11	4791,264	3509,934	527,04	140,95	386,09	71,904	7,91	
 	(0) 	ЗП=2135,55*0,6; ЭММ=5849,89*0,6; ЗПм=1426,2*0,6; Мат=231,42*0; ТЗТ=119,84*0,6; ТЗТм=58,26*0,6	100 шт. сборных конструкций	1281,33	855,72			94,13	34,956	3,85	
 21	ТЕР07-06-002-07	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2	0,11	9999,665	7312,3625	1099,96	270,15	804,36	137,816	15,16	
 	(0) 	ЗП=2135,55*1,15; ЭММ=5849,89*1,25; ЗПм=1426,2*1,25; ТЗТ=119,84*1,15; ТЗТм=58,26*1,25	100 шт. сборных конструкций	2455,8825	1782,75			196,1	72,825	8,01	
 21.1	Цена поставщика	Плиты перекрытия П5-8	3	1221,8		3665,4		
 			шт.					
 22	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	0,01	6981,0825	3726,525	69,81	32,55	37,27	206,77	2,07	
 	(0) 	ЗП=2830,05*1,15; ЭММ=2981,22*1,25; ЗПм=866,21*1,25; ТЗТ=179,8*1,15; ТЗТм=45,63*1,25	100 м3 конструкций	3254,5575	1082,7625			10,83	57,0375	0,57	
 23	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	0,036	3037,7815	2553,2875	109,36	16,68	91,92	25,0355	0,9	
 	(0) 	ЗП=402,96*1,15; ЭММ=2042,63*1,25; ЗПм=544,66*1,25; ТЗТ=21,77*1,15; ТЗТм=21,5*1,25	100 т смеси	463,404	680,825			24,51	26,875	0,97	
 23.1	410-9010	Асфальтобетонная смесь	3,636	2352,05		8552,05		
 			т					
 24	ССЦ01.2000 п.30	Погрузочные работы: Мусор строительный	3,6	7,6	0	27,36	27,36	0		
 			тонн	7,6	0			0		
 25	ССЦ01.2000 Табл.1-1	Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 1	3,6	19,76	19,76	71,14	0	71,14		
 			тонн							
 ИТОГО:	16738,97	4051,1	4557,77	229,2	
 			885,14	38,63	
 	
 3.2.1.27 Внутреннее г/ и х/ водоснабжение. коэф.0.94 (15, 16, 19)	
 Зарплата	6,69	3782,46	3782,46	0	0	
 Машины и механизмы	4,83	194,17	0	194,17	0	
 Материалы	3,6	511,78	0	0	0	
 Итого		4488,41	3782,46	194,17	31	
 Накладные расходы	1,203	4567,2	0	0	0	
 Сметная прибыль	0,83	3151,1	0	0	0	
 Итого		12206,71	3782,46	194,17	31	
 3.2.1.33 Наружные сети водопровода из стальных труб. коэф.0.94 (17)	
 Зарплата	6,69	692,08	692,08	0	0	
 Машины и механизмы	5,17	1318,25	0	1318,25	0	
 Материалы	2,81	36,7	0	0	0	
 Итого		2047,03	692,08	1318,25	5,13	
 Накладные расходы	1,222	1254,73	0	0	0	
 Сметная прибыль	0,89	913,84	0	0	0	
 Итого		4215,6	692,08	1318,25	5,13	
 3.2.1.35 Наружные сети теплоснабжения. коэф.0.94 (9, 11, 13, 14)	
 Зарплата	6,69	10961,77	10961,77	0	0	
 Машины и механизмы	7,9	14652,68	0	14652,68	0	
 Материалы	5,4	42683,87	0	0	0	
 Итого		68298,32	10961,77	14652,68	88,33	
 Накладные расходы	1,222	15645,33	0	0	0	
 Сметная прибыль	0,89	11394,72	0	0	0	
 Итого		95338,37	10961,77	14652,68	88,33	
 3.2.1.4 Конструкции из сборного бетона и железобетона. коэф.0.94 (20, 21)	
 Зарплата	6,69	2750,26	2750,26	0	0	
 Машины и механизмы	6,21	7392,69	0	7392,69	0	
 Материалы	6,29	160,14	0	0	0	
 Итого		10303,09	2750,26	7392,69	23,07	
 Накладные расходы	1,222	5733,5	0	0	0	
 Сметная прибыль	0,85	3988,11	0	0	0	
 Итого		20024,7	2750,26	7392,69	23,07	
 3.2.1.5 Конструкции из монолитного бетона и железобетона. коэф.0.94 (18)	
 Зарплата	6,69	839,86	839,86	0	0	
 Машины и механизмы	5,44	115,98	0	115,98	0	
 Материалы	3,22	46,75	0	0	0	
 Итого		1002,59	839,86	115,98	7,21	
 Накладные расходы	0,987	846,71	0	0	0	
 Сметная прибыль	0,65	557,61	0	0	0	
 Итого		2406,91	839,86	115,98	7,21	
 Автомобильные дороги. коэф.0.94 (5, 22, 23)	
 Зарплата	6,69	385,81	385,81	0	0	
 Машины и механизмы	5,27	838,93	0	838,93	0	
 Материалы	4,13	4,09	0	0	0	
 Итого		1228,83	385,81	838,93	3,5	
 Накладные расходы	1,3348	900,57	0	0	0	
 Сметная прибыль	0,95	640,95	0	0	0	
 Итого		2770,35	385,81	838,93	3,5	
 3.2.1.34 Наружные сети канализации. коэф.0.94 (8, 10)	
 Зарплата	6,69	267,06	267,06	0	0	
 Машины и механизмы	5,13	153,69	0	153,69	0	
 Материалы	4,96	0	0	0	0	
 Итого		420,75	267,06	153,69	2,44	
 Накладные расходы	0,6956	218,9	0	0	0	
 Сметная прибыль	0,5	157,35	0	0	0	
 Итого		797	267,06	153,69	2,44	
 3.2.1.33 Наружные сети водопровода из стальных труб. коэф.0.94 (12)	
 Зарплата	6,69	3051,24	3051,24	0	0	
 Машины и механизмы	5,17	1443,31	0	1443,31	0	
 Материалы	2,81	32,03	0	0	0	
 Итого		4526,58	3051,24	1443,31	28,22	
 Накладные расходы	0,6956	2383,09	0	0	0	
 Сметная прибыль	0,5	1712,97	0	0	0	
 Итого		8622,64	3051,24	1443,31	28,22	
 Погрузка-разгрузка. коэф.0.94 (24, 25)	
 Зарплата	6,69	183,04	183,04	0	0	
 Машины и механизмы	5,22	371,35	0	371,35	0	
 Материалы	3,96	0	0	0	0	
 Итого		554,39	183,04	371,35	0	
 Накладные расходы	0,94	172,06	0	0	0	
 Сметная прибыль	0,6	109,82	0	0	0	
 Итого		836,27	183,04	371,35	0	
 Земляные работы, выполняемые: механизированным способом. коэф.0.94 (1, 3, 6, 7)	
 Зарплата	6,69	1490,93	1490,93	0	0	
 Машины и механизмы	4,84	3177,9	0	3177,9	0	
 Материалы	4,57	82,9	0	0	0	
 Итого		4751,73	1490,93	3177,9	13,97	
 Накладные расходы	0,893	2278,61	0	0	0	
 Сметная прибыль	0,5	1275,82	0	0	0	
 Итого		8306,16	1490,93	3177,9	13,97	
 Земляные работы, выполняемые: ручным способом. коэф.0.94 (2, 4)	
 Зарплата	6,69	2697,34	2697,34	0	0	
 Машины и механизмы	4,84	0	0	0	0	
 Материалы	4,57	0	0	0	0	
 Итого		2697,34	2697,34	0	26,33	
 Накладные расходы	0,752	2028,4	0	0	0	
 Сметная прибыль	0,45	1213,8	0	0	0	
 Итого		5939,54	2697,34	0	26,33	
 Итого		161464,25	27101,85	29658,95	229,2	
 Итого по неучтенным материалам		234144,69	0	0	0	
 Итого		395608,94	27101,85	29658,95	229,2	
 НДС	18%%	71209,61	0	0	0	
 Итого		466818,55	27101,85	29658,95	229,2	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ